○伊東市建設工事検査規程
平成３０年２月２日
伊東市告示第１２号
（趣旨）
第１条　この規程は、伊東市建設工事執行規則（昭和６１年伊東市規則第１５号）に定める建設工事、工事材料及び工事材料製造（以下「工事」という。）の厳正かつ適確な検査を執行するために必要な事項を定めるものとする。
（検査員）
第２条　検査員（工事の検査を行う職員をいう。以下同じ。）は、市職員のうちから市長が任命する。
２　検査員は、検査担当課長（市が発注した工事の検査を担当する課の長をいう。以下同じ。）の指定する工事の検査を行う。ただし、請負代金額が２００万円未満の工事（国庫補助及び国庫交付金事業の工事は除く。）にあっては、工事担当課長（市が発注した工事の監督を担当する課の長をいう。以下同じ。）が指定し、検査を行う。
（検査の種類）
第３条　この規程において「検査」とは、次に掲げる検査をいう。
（１）　工事の完成を確認するための検査
（２）　受注者から出来形確認請求書の提出があり、出来形確認請求箇所に伴う部分払を行う検査
（３）　完成後に明視できない部分又は重要構造物等について、監督員から検査依頼が提出された際、設計図書に基づき工事が適正に施工されているかを確認するための検査
（４）　契約解除により出来形部分の引渡しを受ける場合、又は工事の一部が完成し、引渡しを受ける場合等、工事の既済部分を確認するための検査
（５）　工事材料の使用を承諾するために行う検査
（６）　工事材料の引渡しを受けるために行う材料製造の検査
（７）　委託を受けて行う検査で、この規程に準じて行う検査
（検査員の服務）
第４条　検査員は、検査を実施する前に検査対象となる工事の設計図書を確認しなければならない。
２　検査員は、検査を行うに当たっては、厳正かつ公平に実施及び評価しなければならない。
３　検査員は、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊し、又は分解して検査を行うことができる。
４　検査員は、検査の結果に基づき、必要に応じて監督員又は受注者に設計上又は施工上の意見を述べることができる。
（工事請負契約締結の通知等）
第５条　市が発注する工事の契約を担当する課の長は、工事の請負契約を締結したときは、速やかに工事担当課長及び検査担当課長に通知しなければならない。
２　検査担当課長は、前項の通知を受けたときは、検査員を定め、検査計画を立てるものとし、必要に応じて検査に係る書類の提出を工事担当課長に求めることができる。
３　工事を中止し、工事の請負契約の内容を変更し、又は当該工事の請負契約を解除したときは、前２項の規定を準用する。
（検査の依頼）
第６条　工事担当課長は、検査が必要となった場合には、速やかに検査依頼書（第１号様式）に関係書類を添えて検査の依頼をしなければならない。
２　第３条第１号の検査にあっては、前項に掲げるもののほか、伊東市建設工事成績評定基準により監督員の評価すべき項目を評定した工事成績採点表を添えて依頼しなければならない。
（検査の通知）
第７条　検査担当課長は、前条の依頼を受けたときは、検査実施日時並びに検査員及び関係人の検査立会人その他検査に必要な関係人を決定し、検査執行通知書（第２号様式）により工事担当課長に通知するものとする。
（検査の基準）
第８条　検査に必要な技術的な基準は、静岡県建設工事検査技術基準（平成２８年３月２９日付け建工第１０４号）を準用するものとする。
２　前項に適用できないと判断される工事は、契約後速やかに工事担当課長と検査担当課長が協議し、当該工事の検査に係る基準を定める。
（検査の中止）
第９条　検査員は、検査の実施に際し、受注者若しくはその使用人若しくは代理人が検査の執行を妨げ、又は書類の不備等により検査を行うことができないときは、検査を中止する。この場合において、検査担当課長は、工事担当課長に対し、その理由を明記して速やかに通知するものとする。
（検査の結果）
第１０条　検査担当課長は、検査を実施した結果、当該工事が設計図書の内容に適合すると認めたときは、速やかに工事検査報告書（第３号様式）及び検査調書（第４号様式）を作成し、市長に報告しなければならない。
２　検査担当課長は、前項の規定による報告の後、当該検査の結果について工事検査認定通知書（第５号様式）により、工事担当課長に通知しなければならない。
３　第３条第１号の検査にあっては、工事検査報告書に検査員の評定した工事成績採点表を添えて報告し、評定の結果を工事検査認定通知書により工事担当課長に、工事完成認定書（第６号様式）により受注者に、それぞれ通知しなければならない。
４　第３条第２号の検査にあっては、工事検査認定通知書に出来形確認調書（第７号様式）を添えて通知しなければならない。
（不適合の場合の措置）
第１１条　検査担当課長は、検査を実施した結果、設計図書の内容に適合しない部分があると認めるときは、工事手直し命令書（第８号様式）により受注者に、工事手直し通知書（第９号様式）により工事担当課長に、それぞれ通知しなければならない。
２　工事担当課長は、受注者による手直し部分の補修、改造その他必要な措置の完了を確認し、工事手直し確認書（第１０号様式）により検査担当課長に報告しなければならない。
３　報告を受けた検査担当課長は、速やかに工事手直し命令箇所の検査を行い、その検査内容を工事検査報告書及び検査調書に記載し、当該検査の結果については、前条第１項から第３項までの規定を準用する。
（委任）
第１２条　この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附　則
この規程は、平成３０年４月１日から施行する。

第１号様式（第６条関係）
第２号様式（第７条関係）
第３号様式（第１０条関係）
第４号様式（第１０条関係）
第５号様式（第１０条関係）
第６号様式（第１０条関係）
第７号様式（第１０条関係）
第８号様式（第１１条関係）
第９号様式（第１１条関係）
第１０号様式（第１１条関係）